一、工程概况：

  工程名称：香格里拉酒店扩建工程支撑爆破拆除
  委托单位：********
  施工单位：********
  工程地址：位于本市浦东陆家嘴金融贸易区
  周围环境：东距银城西路12米；南距震旦广场围墙10米；西距香
            格里拉大酒店10米；北距正大广场17米。
  工程量：  钢筋混凝土支撑两道，约1881立方米（见表）。
名称	长度（M）	规格（M）	方量（M3）	配筋（T）	含钢率	
ZC1*2	652.5	0.8*0.8	417.28	50.24+8.93	0.141	
ZC2*2	182.2	0.9*0.8	131.18	13.95+2.67	0.126	
ZC3*2	56.8	0.75*0.75	31.95	3.50+0.75	0.133	
ZC4*2	138.5	0.7*0.7	67.87	7.47+1.69	0.134	
L1*2	42.5	1.1*0.7	32.50	3.93+0.47	0.135	
L2*2	54.5	1.1*0.8	47.96	5.45+0.38	0.121	
L3	49.5	0.9*0.6	26.73	3.25+0.43	0.137	
L4	34.5	0.9*0.6	18.63	3.12+0.27	0.20	
QL1	250.5	1.15*0.8	230.46	15.5+2.9	0.079	
QL2	60.5	1.15*0.8	55.66	4.19+0.7	0.087	
QL3	16.0	0.9*0.8	11.52	1.48+0.22	0.147	
ZQ			80.0	10.24		

二、爆破施工方案
  （一）控制目标
1¡¢	控制爆破振动，确保周围建筑及设施的安全。
2¡¢	控制爆破时间，尽量不扰民、少扰民。
3¡¢	控制爆破飞石在基坑内。
4¡¢	控制噪声并尽可能减少。
  （二）爆破施工组织
    1、在甲方浇捣支撑、围檩的同时我方即派人员配合预埋纸管。    
    2、按甲方与设计的程序安排，划分区域，分块、逐段、逐根进行爆破。当甲方钢筋混凝土底板达到养护期后试炮，并按消防局规定每天爆破量不超过250M3，因此第二道支撑围檩的爆破工期需3－4天，第一道支撑围檩的爆破工期需4－5天；清凿钢筋混凝土块工作在实施爆破的第二天即开始同步进行，使混凝土块粒径小于40厘米，支撑围檩的清凿工作在爆破结束后4－5天完成。
    3、支撑、围檩爆破时，先爆破联系撑、角撑、对撑再爆破围檩，使原支撑的应力按要求逐步均衡释放。    
    4、严格控制飞石、响声、冲击波。采用多层麻袋直接覆盖及竹笆多层隔空遮护，达到减少声响及冲击波，确保飞石基本在基坑内。防护棚由甲方按照我方设计搭设。
    5、爆破时，甲方及监理部门，可进行监测，发现情况及时联系研究，以确保在安全前提下完成支撑爆破拆除工程。
    6、爆破实施每天一次，采用分段毫秒延时、逐段解体技术。每单次齐爆药量控制在3公斤以下，近主要保护段控制在2公斤以内。
    7、每天的起爆时间，根据协调会上各单位负责人协商后确定，爆前作好安民告示工作。
三、安全技术措施
  
  （一）爆破参数设计
    本工程采用预埋孔技术。孔深为3/4支撑、围檩厚度，其截面积占支撑、围檩截面积的5%左右，预埋孔为圆孔，对支撑、围檩的强度、应力影响是极小的。
  1、ZC1.该种支撑宽0.8米，厚0.8米，布置3排孔。利用公式q=kawh，计算单孔装药量时，用药系数k取0.8～1.0公斤/立方米；孔距a＝0.75米,厚度h=0.8米,最小抵抗线w＝0.2米，排距b=0.2米，直孔，孔深度l=0.60米。
单孔装药量取100克。ZC2、ZC3、ZC4、L3、L4、QL3类似，用药量略作调整。

        剖面图                             布孔图

  2、L1.该种规格宽0.7米，厚1.1米，布置3排孔。利用公式q=kawh，计算单孔装药量时，用药系数k取1.0～1.2公斤/立方米； a＝0.7米,h=1.1，w＝0.2米，直孔，孔深度l=0.9米。 
单孔装药量取180克，双节装药。L2类似。图略。
  3、QL1、QL2。该种围檩宽1.15米，厚0.8米，布置五排孔。利用公式q=kawh，计算单孔装药量时，用药系数k取1.4～1.6公斤/立方米；孔距a＝0.8米,厚度h=0.8米,最小抵抗线w＝0.20米，直孔，孔深度l=0.60米。
单孔装药量取200克。（图略）
  4、各种结点。本工程各种结点类型很多，总的处理原则是：结点处孔距、排距作些调整，使布孔尽量均匀。爆破时，单孔药量增加25---50克。下面举一个典型（图）：

                         结点布孔俯视图

  （二）、振动控制
在本工程爆破拆除支撑、围檩时防振动采取的对策：
    1、采取多段、小药量延时爆破。为确保基坑围护体系及周边管线的安全，为满足建工集团总公司的“爆破不扰民”的要求，采取多段、小药量延时爆破。在靠近香格里拉和正大等重点保护区段的支撑、围檩，每次起爆药量控制在2—2.5kg，其他地方的每次起爆药量控制在3kg以下，按每天爆破250立方，可分为120段左右，每段间隔0.1秒。由于爆破主振频率在30—50赫兹，0.1秒的时间间隔能够做到振波主振相不叠加。将爆破振动影响控制在国标所规定的允许范围5cm/s之内。
2、为减小爆破振动，确保爆破质量，在每根砼支撑与围檩的交接处，先进行密孔、小药量、予裂切割爆破，在此形成裂缝或断口，使以后爆破支撑时的振动波传递到此即被隔绝。
    3、围檩爆破时，预先炸出三角形切口，为以后的连续爆破增加临空面并进一步改变作用力的方向。围檩爆破后，围檩与连续墙之间已开始有裂缝，大大减少以后围檩的爆破振动的传递。
    4、爆破振动计算公式：
       V=K(Q1/3/R)a
   式中V----振速（厘米/秒）
        K——传递介质参数；
    Q——一次起爆药量；
    R——爆破中心至须保护建筑的距离；
    ——衰减系数；
本工程最近距离为10米，按照震速公式计算,当R=10、Q=3Kg、K=50时，V=1.04cm/sec .远低于爆破振动安全规定（国标5cm/sec），对周围建筑不可能造成大的影响。
例如，在市建一公司承建的万象工地，支撑、围檩爆破量达5000多立方米，北侧距地铁2#线仅隔4米，在采用支撑预分割和围檩小药量、多批次爆破的技术后，经测震单位的测震结果证明，爆破对周边地下构筑物无影响。再例如，正在建造的震旦大厦基地，共3道支撑，最近的一条电缆沟也仅4米，监测结果完好（备份可查）。
  （三）飞石的控制
    1、加强对炮孔的预埋和补钻的技术管理，严格控制炮孔的位置与深度。
    2、严格把握好装药关，对于特别的位置，由富有经验的技术人员进行药量的调整，确保爆破的质量和安全。
    3、严格执行防护方案，双重全封闭防护棚，并由指定的人员检查防护质量，决不放过任何一个漏洞。
    4、每一层支撑、围檩大量爆破前，先进行小药量、小范围试爆，并加以增强覆盖。经试爆确定精确的单耗药量后，再进行大量爆破工作。
  （四）噪声的控制
  由于本工程的特殊环境，爆破工作必须控制爆破声响，以避免爆破引起不必要的惊慌和执行市政府的少扰民的指示。控制具体措施为：
    1、精确计算装药量，避免多余能量向空中的发散，但也要尽可能减少爆后清凿工作量，减少空压机噪声。
    2、在被爆体上覆盖多层湿麻袋，以吸收部分爆破噪声。
    3、利用微差爆破技术，控制每段起爆药量，防止单段的爆破噪声过大。
    4、保证炮孔的堵塞长度与堵塞质量，避免冲炮。
    5、一方面我们采用加强覆盖、严密防护的方法，使影响因素控制在最小的范围内。另一方面，爆破前与各有关方面进行协调，通知所有周围邻近工作和生活的人员，以免引起惊慌发生不测事故。
    6、采用预埋孔技术，即在甲方浇捣支撑、围檩的同时我方即派人员配合预埋，甲方需在每次浇捣前两天通知我方。采用预埋孔的优点是：节省钻孔时空压机耗用电能 ,减少钻孔噪声,减少钻孔时的灰尘。
  （五）爆炸物品的管理及其他安全措施
    1、严格按照公安部颁发的《民用爆破物品管理条例》执行。
    2、切实加强对爆破物品的管理制度，严格按照市消防局对爆破物品管理的有关规定。爆炸物品进入施工现场时必须派专职安全人员看管，工地上有专职保管员24小时值班，爆炸物品必须分类、分库保管，并实行五双制度，爆炸物品领、退、出入库均必须及时记帐，现场操作时由安全员负责监督和检查，做到万无一失。爆破现场作好安全隔离带。无关人员一律不准进入爆破现场。
    3、严格按照工地安全规则施工，加强对施工队伍法纪安全教育。
    4、与公安警署、周围相关单位密切配合，做到安全、文明施工。
    5、临时用电，遵守市建委《施工现场电气安全管理规定》中的有关规定；施工机械设备的安全防护装置，严格按照有关的安全技术规程配置，并做到定机、定人、定岗位。
    6、爆破后, 立即由爆破员对爆区现场进行检查, 如发现哑炮, 则马上予以处理，不留隐患，并始终进行监护，直至清理完毕。
  （六）爆破时的警戒
    爆破前根据本工程具体情况制定严密的警戒方案，爆破时做好安全警戒工作, 待全体人员撤至安全区后, 即封锁所有通道, 每个警戒哨位配备对讲机进行联络。起爆口令通过对讲机下达: 接线—充电—充电完毕、准备起爆—五、四、三、二、一、起爆—撤除警戒。
  （七）安全防护（见附图）
        
四、施工组织网络及其他

  （一）施工组织指挥系统见图示，其主要职责如下：

                                       技术组
                  技术副经理           爆破组
                                       施工组 
                  施工负责人           后勤组                       
   项目经理                                          
                  质量管理组           质检员                        
                              
                  安全总监             安全组         
                                         
    项目经理：  负责工程全面指挥、协调和管理工作。
    技术副经理：负责工程设计，并对技术组和爆破组的药包加工、网络连接、施爆操作等工作进行指挥和管理。
    施工负责人：负责对施工组和后勤组工作的安排和管理。
    施工组：    负责钻孔、清孔，机械人工施工。
    后勤组：    负责施工和生活的后勤保障及财务管理。
    安全总监 ： 负责监督各项施工工作中的安全执行情况。
                              
   （二）器械及人力安排：
    1、6立方米空压机2台，凿岩机6—8把，风镐10—15把。   
    2、各种相关爆破器材。
3、工人20名。
    4、我方负责申请爆破拆除支撑、围檩的所有批准手续，在爆破施工前须持有有效的书面批准文件。

五、需甲方的配合

    1、按照乙方爆破安全的要求搭好防护棚（见防护图），准备好覆盖用的麻袋（第二道支撑围檩需3000只，第一道支撑围檩需6000只）。
    2、提供150千瓦动力电源和施工用电、用水。
    3、经爆破组查验后，方可进行爆后气割工作。
    4、提供爆炸物品保管、操作及办公用房2间，施工队住房2间（每间16平方米以上）以及水电、通讯等工作、生活方便。
5、	配合召集周围有关单位、当地警署、街道等的协调会及共同做好相邻单位、居民的安民告示工作。

                                 

第二道支撑、围檩爆破防护天棚示意图

地
下连续墙

 双层竹芭

地
下连续墙

麻袋层

            大    底    板

注：
1、	防护采用钢管、竹芭制作。
2、	钢管利用第一道支撑依托平行铺设，钢管间距0.5米。
3、	上下两层竹芭一横一纵排列，相邻竹芭搭接20公分铺设。竹芭与钢管之间用铁丝扎牢。
4、	开阔处用井字架支撑，井字架的钢管用脚手铐连接。
5、	内外两层竹笆与钢管扎牢。
6、	防护棚搭设时，我公司施工人员现场进行指导。
7、材料估算：竹笆5000张（损耗20%），钢管10000米（损耗2%）。

   第一道支撑爆破防护天棚示意图

单层竹笆

1m

双层竹笆

 2m

地坪

 1m

地下第一层楼板

注：
1、	第一道防护棚为双层结构，设在地坪面，完全靠钢管井字架支撑。
2、	内层结构铺设双层竹笆，外层结构铺设单层竹笆。
3、	具体铺设要求同第二道支撑。
4、	防护棚搭设时，我公司施工人员现场进行指导。
5、